과업지시서

⧠ 용역명 : 교량거동 계측시스템 및 고속축중(WIM) 시스템 구축, 데이터 수집 및 데이터 분석용역(장기계약1차)

⧠ 용역기간 : 계약일부터 ~ 2024년5월31일

⧠ 예산 : ₩132,000,000원 (부가세 포함)

⧠ 과업 개요

중소 노후교량에 대한 건전도를 평가하기 위해서 교량의 실제 거동정보와 함께 교량을 통과하는 중차량의 하중과 속도, 통행패턴 등의 추가적인 정보를 함께 획득하는 것이 중요하다. 교량의 거동정보를 수집하는 시스템 계측시스템이며 통행차량의 정보를 획득하는 시스템은 고속축중시스템 (HS-WIM SYSTEM)이다. 본 용역에서는 중차량 통행이 빈번한 구간을 대상으로 대상교량을 선정하고 교량 계측시스템과 고속축중 시스템을 활용하여 교량 거동 정보와 교량 상을 통과하는 차량에 대한 중량, 차량 대수, 속도, 통행패턴 등에 대한 정보를 장기간 획득하여 대상 교량에 대한 상태분석 및 건전도 평가에 활용 하고자 한다.

⧠ 과업범위(3차년도 전체범위).

장기계약 1차 범위는 “고중량 차량 자동운행허가 시스템 도입 연구”와 연동함.

1. 실 사용성 검증을 위한 대상 교량 선정 및 관련자료 조사 분석(4개소)

2. 교량거동 계측시스템 설치(교량거동 계측데이터 12개월 측정, 4개소)

3. 고속축중(WIM)시스템 설치(고속축중 계측데이터 12개월 측정, 4개소)

4. 교량거동 계측시스템 및 고속축중 시스템 데이터 수집 및 관리

5. 교량거동 계측데이터 및 고속축중 데이터 분석

⧠ 과업 수행 내용

1. 계측시스템 및 고속축중 시스템 설치 대상 교량 선정

- 신뢰성 기반 교량 안전성 평가 기법의 실제 사용성 검증을 위해 중차량 재하시험 및 장기 모니터링을 수행할 대상교량을 중차량 통행이 빈번한 구간을 대상으로 교량 4개소를 선정한다.
∘ 철근콘크리트 슬래브교 (RC슬래브교)
∘ 철근콘크리트 라멘교 (RC라멘교)
∘ 프리스트레스트 콘크리트 I형교 (PSC 빔교)
∘ 강박스교(강합성 상자형교)

- 계측시스템 및 고속축중 시스템의 장기계측을 위한 여건을 고려하여 최적의 교량을 선정한다.

2. 계측시스템 설치

- 대상 교량 선정 후 교량 특성에 맞게 계측항목의 측정위치를 선정하고 계측시스템 4개소를 구축한다.

< 교량 장기 계측항목 >

계측항목	사용센서	측정위치	정적/동적	평가 활용
거더 응력	변형률계	거더 하면	동적	해석값 비교
거더 처짐	처짐계	지간 중앙,거더하면	동적
거더 동적 응답	가속도계	거더 중앙, 거더하면	동적	고유진동수, 진동가속도 MMA, RMS
부재 온도변화	온도계	거더 하면	정적	부재 온도 변화 확인

- 계측시스템 구축 후 약 12개월 간의 장기계측 모니터링을 수행하여야 하며 본 과업 종료 이후에도 필요 시 최소한의 비용으로 추가적인 데이터 획득이 가능하도록 충분한 내구성 확보하여야 한다.

- 구축한 시스템은 격지의 사무실에서 무선연결을 통해 원격제어하여 시스템 정상작동 여부 및 데이터를 확인하고 계측데이터 이상, 계측시스템 이상 및 정전과 같은 상황 발생 시 조치 가능하도록 구성하여야 한다.

< 계측시스템 구성도(예시) >

- 안정적인 장기 모니터링을 위해 주기적으로 현장을 방문하여 계측시스템의 유지관리를 수행하여야 한다.

3. 고속축중 시스템 설치

- 시스템 설치 위치 선정 후 관할기관과 설치와 관련하여 협의하고 행정절차를 준수하여 시스템을 설치한다.

< 고속축중시스템 구성도(예시) >

- 구축한 계측시스템과의 상호연계를 통해 시각동기화를 하여야 하며 격지의 사무실에서 무선연결을 통해 원격제어하여 시스템 정상작동 여부 및 데이터를 확인하고 데이터 이상, 시스템 이상 및 정전과 같은 상황 발생 시 조치 가능하도록 구성하여야 한다.

- 안정적인 장기 모니터링을 위해 주기적으로 현장을 방문하여 고속축중 시스템의 유지관리를 수행하여야 한다.

4. 교량거동 계측시스템 및 고속축중 시스템 데이터 수집 및 관리

- 교량거동 계측시스템과 고속축중 시스템에서 주기적으로 데이터를 수집하고 관리하여 시스템의 안정적으로 작동하도록 유지관리 한다.

- 장기계측 모니터링 시스템은 원격지의 사무실에서 무선연결을 통해 원격제어하여 시스템 정상작동 여부 및 데이터를 확인하고 계측데이터 이상, 계측시스템 이상 및 정전과 같은 상황 발생 시 조치 가능하도록 구성

5. 교량거동 계측데이터 및 고속축중 데이터 분석

- 각 교량에 대하여 약 12개월 간의 장기계측 모니터링을 수행하여 반복적인 중차량 통행에 따른 교량거동의 변화를 관찰한다.

- 교량거동 계측데이터와 고속축중 데이터를 상호 비교 분석함으로써 중차량 통과에 따른 교량거동을 데이터 기반으로 분석한다.

⧠ 기타사항

(1) 계약상대자는 본 과업 수행 전반에 걸쳐 본 과업지시서 및 관련 규정에 따라 성실히 수행하여야 하며, 발주기관의 지휘․감독을 받는다.

(2) 본 과업수행 중 제출하는 각종 성과에는 사업 책임기술자가 발주기관에 등록한 인감이나 서명을 사용하여 날인하여야 한다.

(3) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이나 과업 수행 중 과업내용의 추가나 변경이 필요한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 처리한다.

(4) 본 과업 수행을 위해 교통통제가 필요한 경우에는 교통관련 부서와 충분한 협의를 하고 교통통제대책을 수립하여 발주기관의 승인을 받아 실시하여야 한다.